「2018. 천안예술의전당미술관 3층 메쉬천장시스템 제작설치 사업」

메쉬천장 및 파티션 제작 및 설치 시방서

2018. 01

1.메쉬천장 및 파티션 제작/설치공사 일반시방서

2.메쉬천장 및 파티션 제작/설치공사 특기시방서

메쉬천장 및 파티션 제작/설치 공사 일반 시방서

1. 사업개요

1-1. 사 업 명 – 2018. 천안예술의전당미술관 메쉬천장 및 파티션 제작/설치 사업

1-2. 사업목적

메쉬천장 및 파티션 제작/설치를 하여 관람객 안전사고 방지룰 위한 시설 운영과 다양한 작품 설치를 하여 전시 공간 확충에 기여하고자 함.

1-3. 설치장소 및 개요

미술관 3층 전시실

1-4. 설치기간

계약일로부터 25일 이내

1-5. 예정공정표

구 분	계약일로부터 25일간																									비 고
	5					10					15					20					25
현장 파악 및 실측
메쉬천장 및 파티션 제작
메쉬천장 및 파티션 설치
주변청소정리 및 보고서 작성

2. 총칙

2-1. 적용범위

가. 본 시방서는 「2018. 천안예술의전당미술관 메쉬천장 및 파티션 제작/설치 사업」에 적용한다.

나. 본 공사는 당 재단에서 지정한 감독원의 지시를 본 시방서에 의하여 공사를 수행한다.

다. 본 시방서에 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 건설부 표준시방서 및 당 공사 관리규정에 준한다.

2-2. 용어의 정의

가. "발주자"라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급으로서 도급받은 건설공사를 하도급 하는 자를 제외한다.

나. "시공자"라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며, 하도급 관계에 있어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.

다. "담당원"이라 함은 발주자가 지정한 감독자 및 감독 보조원을 말한다. 감독자라 함은 감독책임기술자로서 당해공사의 공사 관리․기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독자의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2-3. 시방서

가. 시공자는 당재단에서 승인한 도면 및 특기시방서에 따라 시공하여야 하며, 현장 조건에 의한 변경작업 시에 당재단 감독원의 사전승인을 받아야한다.

나. 각 특기 시방서 및 공사 시방서가 서로 상이하거나 이상이 있을 때에는 시공자는 필히 당재단 감독원에게 보고하고 그의 지시에 따라야 한다.

3. 설계변경 및 정산변경

본 공사의 수행 중 주위 여건의 변화, 설계기준의 변경 등으로 인하여 본 공사의 변경이 요구될 때에는 그 변경량의 경중에 따라 감독원은 설계변경여부를 결정할 수 있으며 시공자는 이 결정에 따라 변경 시공하여야 한다.

4. 자재관리

가. 시공자가 본 공사를 위하여 지입하는 일체의 자재는 당 공사 감독원의 검수를 받은 후 시공을 하여야 하며, 검수를 받지 않거나 검사에 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 부분은 즉시 시공자 책임 하에 재시공한다.

나. 시공자가 지입하여 사용하는 일체의 장비 또는 자재가 사용하기에 알맞지 않다고 인정될 때 당 공사는 이를 교체 또는 정비토록 명할 수 있으며 시공자는 이에 적극 순응하여야 한다.

5. 시공자가 준비할 자재 및 건설장구

가. 시공자는 목적과 용도에 적합한 품질이 우수한 자재를 적기에 사용할 수 있도록 사전에 수배하여 당 공사 감독원의 검사를 받아야 한다.

6. 안전관리

가. 본 공사에 수반되는 일체의 가설 작업 준비, 시공방법 및 운반 해체 작업은 당 공사 감독원의 사전 승인을 얻어 당 공사 안전작업 규정 및 기타 안전수칙에 따라 수행하여야 한다.

특히 중량물 및 파손되기 쉬운 기기의 조양은 안전하고 확실한 조양장치의 작업준비를 하며 당 인명에 손상을 가져오지 않도록 해야 한다.

나. 시공자는 작업현장에 소화 작업에 준하는 일체의 방화대책을 강구하여야 하며 타 설비에 위해가 발생하지 않도록 제반 보완 대책을 강구할 것이며 공사 기간 중 유발되는 일체의 안전사고에 대한 보상은 시공자가 진다.

다. 안전사고에 따른 재해는 시공자가 민・형사상 모든 책임을 지고 처리한다. 또한 공사 준공 후라도 사용자측과 인계인수 또는 댓가지불 이전에 일어나는 것도 동일하다.

7. 품질 및 환경 관리

가. 시공자는 본 공사를 수행함에 있어 공사 품질관리에 만전을 기하여 완벽한 품질을 유지하여야 하며 현장 품질관리상의 문제점을 검토하여 이에 대한 조치를 강구하여야 한다.

나. 시공자는 도면과 시방의 숙지, 그리고 하자발생을 고려한 검토 후 시공에 임하여야 하며, 문제발생이 예상되는 부분은 감독원과 반드시 협의 후 시공해야 한다. 협의 하지 않고 시공 시 그 부분의 시공과 하자 책임은 시공자에게 있다.

다. 시공자는 공사 중 발생되는 철거재 및 자재의 잔여재 등은 적법하게 처리되도록 해야 하며 공사 후 현장은 청결한 상태로 유지를 해야 한다.

라. 시공자는 현장자재의 정리정돈에 만전을 기하고 발생되는 잔여재와 쓰레기관리를 철저하게 감독 및 정리하여야 한다.

8. 공사

가. 공사 착수일 계약 후 3일 이내에 실시를 해야 하며 소정의 양식으로 신고를 하되 공사감독원을 경유해야만 한다.

나. 공사 시 입주민에게 어떠한 소음 등의 일제의 피해를 주어서는 아니 되며 공사로 인한 민원 발생 시 시공자가 그 책임을 지며 그에 대한 소요비용 또한 시공자가 전액 부담을 한다.

다. 시공검사

시공 후에 검사가 불가능하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 감독원의 입회하에 할 것이며, 시공자 임의로 시공하여 발생되는 문제는 시공자 부담으로 재시공할 것을 감독원이 명령할 수 있다.

라. 준공

시공자는 준공을 요하는 서류를 제출 전에 사전 공사 감독원에게 예비검사를 필하여 확인 날 후 제출하여야 하며, 공사감독원의 경유 날인이 없는 것은 그 효력이 없다.

마. 인수・인계

시공자는 서면에 의해 해당 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적을 관리하며 그 책임을 져야한다.

9. 기타

가. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 반드시 감독원의 지시에 따라 수행해야 하고 본 시방서 및 설계서에 명시되지 않았다고 하여 작업을 소홀히 하거나 누락해서는 아니 되며, 특히 감독원의 지시도 없이 시공자 임의로 수행하는 일이 없도록 유의하고 관계규정 및 기준에 충분하도록 수행하여야 한다.

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부 표준시방서에 따라 수행하여야 한다.

메쉬천장 및 파티션 제작/설치 공사 특기 시방서

1.특기시방

1-1 일반사항

(1) 적용범위

전시용 메쉬천장시스템 설치에 관하여 적용한다.

(2) 참조도서

SHOP. DWG 및 기타 계약도서 준하여 일치되게 설치한다.

(3) 용어정의

- SUPER CROSS MESH

전시용 메쉬천장시스템의 마감재

(4) 제출물

- 제품자료

제품의 구조, 기타 부속물의 구성도면

- 제작도면

제품의 구조체 위치 및 마감재 기타관련

- 견본

각종 주재료를 작은 크기로 절단된 형태

- 준공 제출물

작업진행 사진철, 하자이행증권

(5) 품질보증

- 각종 증명서 또는 시험성적서

- 계약이행증권

(6) 운송, 보관

- 포장ㆍ운송

보양 테이프 포장하여 운송 한다.

- 현장반입

현장반입시 가장 가까운 거리까지 차량출입이 가능하게 부지정리하며 고층 이동시        엘리베이터를 사용 한다.

1-2 제    품

(1) 재료

- SUPER CROSS MESH

#50*50*4T Steel Mesh(특수 압접 MESH)

(2) 제품 유니트

- SUPER CROSS MESH

#50*50*4T Steel Mesh로 이음 부는 특수 압접 되어있으며 분체도장 마감 하여야 하며

연결부의 인장강도가 500 N/㎟이상 이어야 한다.

가. 메쉬천장시스템 설치 공사

1-3 시    공

(1) 검 사

도장상태 및 연결상태 검사

(2) 준비작업

설치위치에 먹매김을 한다.

(3) 설 치

규격에 맞게 제작된 SUPER CROSS MESH를 AL. FRAME에 올려놓으며 규격이 맞지 않는     SUPER CROSS MESH는 현장에서 커터기로 절단하여 올려놓아야 한다.

SUPER CROSS MESH는 천장속의 점검을 위해 AL. FRAME에 고정하지 않아야 한다.

조명레일 설치 및 전기공사는 해당 전기공사 업체에서 실시한다.

(4) 현장품질관리

선 공정된 작업 분은 보양 후 공사를 진행하며 문제 발생 시 감독관과 협의한다.

나. 이동식 전시칸막이 설치 공사

1. 일반사항

1-1 적용범위

전시용 이동식 칸막이 공사로 도면에 명시된 위치 및 규격을 제작시공에 관하여 적용한다.

1-2 참조도서

SHOP DWG. 및 기타 계약도서를 포함하여 계약조건과 본시방의 기재사항을 준용하여     일치되게 시공한다.

1-3 용어정의

- Trolley

판넬의 주요구동 Runner

- Track

Trolley의 이동 Rail

- Picture hanging system

액자류의 작품을 판넬에 못을 박지 않고 걸이를 이용하여 걸 수 있는 용품.

1-4 성능요구사항

- 전시용이동식 칸막이는 상부에 알루미늄 트랙을 설치하여야 하며 사전 Program되어      방향전환이 자유로워야한다.

- 상부 Trolley Position은 판넬의 하중을 충분히 견딜 수 있는 볼트를 사용하여야       하며 풀림방지 너트 및 견고하게 고정시켜 판넬의 탈락을 막아야 한다.

1-5 제출물

- 제품자료

제품의 구조, 기타 부속물의 구성도면, 카탈로그

- 제작도면

제품의 구조체 위치 및 마감재 기타관련 알루미늄 몰딩이 그려진 도면

- 견본

각종 중요부재를 조그만 크기로 절단된 형태

- 준공 제출물

작업진행 사진철, 주의사항 및 운영지침서, 하자이행증권, Up-Down Mechanism          작동핸들

1-6 품질보증

- 각종 증명서

계약이행증권, 지명원

- 생산자ㆍ시공자

이동식칸막이 전문제조업체로 제조공장의 등록된 업체로 전문 직종에 종사하는 자

- 공사 전 협의

정확한 마감(판넬 제작시 중요) 배관, 배선, 등기구, 닥트, 스프링클러, 감지기 및      기타 천정 시공시기 등을 고려하여 협의

1-7 운송, 보관 및 취급

- 현장반입

판넬의 운반 시 가장 가까운 거리까지 차량출입이 가능하게 부지정리, 고층 이동시      크레인 및 엘리베이터 사용 가능상태

- 저장과 보호

판넬 현장설치 후 기타 공정의 작업원활을 위해 판넬 창고에 수납

1-8 현장조건

- 이동식 칸막이 트랙 설치 시 바닥에 장애물 제거(우마이동 및 바닥 먹매김 작업)

- 판넬 설치에 필요한 공간 확보

1-9 하자보증

- 특수공사 하자 : 천정상부 Slab 처짐

- 제조업자의 하자 : 핸들 작동 시 무리한 힘으로 작동하여 내부의 Mechanism 불량,       수리를 위한 마감재료 보수 사용자측 부담. 기타제품상의 문제점, 시공자 부담.

유지관리 서비스 수시로 가능.

2. 제    품

2-1 재료

- 철재, 비철금속, 비금속, 합판 등 마감 재료는 규격품 또는 동등이상의 제품으로서      미려하고 조립 시 견고해야 한다.

- 단순기기가 아닌 중요한 하중을 부담하는 앵커 철물, 보강철물, 기타 부속재료는       해당하중을 충분히 부담할 수 있는 강도 지지력을 갖춘 제품이어야 한다.

2-2 제품 유니트

- Panel(두께: 93mm)

가. 표면재

THK 9mm 합판 또는 MDF을 직결나사로 양면 취부한다.

나. 내부 Frame

Frame은 1.4㎜ 이상의 Steel pipe를 사용하며 접합은 용접으로 하고 방청페인트           처리한다.

다. 내부재

Paper Honey comb를 조밀하게 충진 시켜 Panel 두께를 유지할 수 있도록 되어야 한다.

라. Up-down mechanism

Panel의 Up-down mechanism은 Ceiling 50mm 및 floor 50mm의 공간을 주고 이동하여

Setting시 30ㆍ35㎏의 압력으로 지지하여야 한다.

마. Trolley 사용 수량은 Panel당 2 sets로 구성되어야 한다.

바. Panel의 측면에는 Aluminum Vertical mould를 부착하고 벽지마감 시 마무리가

노출되지 않도록 Aluminum Vertical Cap mould를 사용 처리할 수 있도록 되어야한다.

사. Panel의 하부에는 Up-down mechanism에 의해 작동되는 Stoper Foot을 설치하여         Panel을 이동고정 할 수 있도록 되어야 한다.

아. Panel의 상부 양면에 기존에 사용하던 그림걸이를 사용할 수 있는 그림걸이 레일        (D-1 TYPE, 추천하중50kg용)을 설치하여 액자류 등의 작품을 걸 수 있도록 하여야         한다.

- Trolley(5TON이상)

가. 재질 및 규격은 도면 및 Sample 승인에 준하여 Partition의 Main Trolley로 사용한다.

나. Trolley (Cross) type으로 Partition의 Main trolley로 사용한다.

다. Hanger bolt

Trolley와 Partition을 연결하는 Bolt로서 특수 열처리 후 표면에 특수코팅이 되        어야  하고 구조재에 Nut형식의 Trolley position이 부착되어야 한다.

- 부속품

연결스크류, 고장력 볼트, 알루미늄 압출형재, Trolley, 앙카볼트

- 생산자 품질관리

하부 Stoper Foot의 고정상태 체크

3. 시    공

- 검 사

가. 판넬을 설치하여 조인트 부분의 틈새조정 상태

나. 하부 Stoper Foot의 작동여부 체크

- 준비작업

제품 설치 시 하부 파손을 막기 위해 보양재 설치 및 로프를 이용하여 패널 설치

- 설 치

가. 특수기술

판넬과 Trolley의 고정 상태를 정확하게 설치체크

나. 타작업과의 연계성

바닥부분의 불필요한 자재처리

- 현장품질관리

상부 Track 설치 시 용접부분 확인 및 제품의 찍히는 부분 관리, 판넬 설치 후 미     숙한자의 사용으로 Cross 부분 충격 또는 벽면으로 충격을 주어 벽체손상을 막아야     한다.

- 시운전

시운전시 실제사용하의 입회자에 주의 사항 및 문제 발생 시 조치사항 등 운영지침서

및 부속자재(핸들) 전달.